ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
 
НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ РЕЗИНОВОГО ЛИНОЛЕУМА   

1. Область применения карты

      1.1. Технологическая карта разработана на производство работ по наклеиванию резинового линолеума в одной секции одного этажа ремонтируемого здания на площади пола 152,4 м.
      
      1.2. При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются объем работ, калькуляция трудовых затрат, график выполнения работ и технико-экономические показатели.

2. Организация и технология строительного процесса 

     2.1. До начала работ по устройству покрытия пола из резинового линолеума должны быть выполнены следующие работы:
      
      а) разобраны старые конструкции пола;
 
     б) отремонтированы старые перекрытия или смонтированы новые;
      
      в) смонтированы все санитарно-технические системы;
 
     г) выполнены штукатурные и облицовочные работы;
 
     д) устроены основания под полы и выравнивание их: деревянное- острогать, цементно-песчаное или асфальтовое - прошпаклевать;
      
      е) произведена окраска потолков, оклейка стен обоями;
 
     ж) поданы внутрь помещений материалы, потребные для устройства полов.
      
      2.2 Линолеум резиновый наклеивается на готовое основание кумароно-каучуковой мастикой КН-2 и КН-3. Для прочной приклейки резинового линолеума (релина) поверхность нижележащего слоя должна быть как можно более ровной. Для этой цели стяжки и выравнивающие слои нужно шпаклевать один или два раза шпаклевкой, составленной из клея КН-3 и сухого цемента в соотношении 1:1. Шпаклевка готовится путем введения цемента небольшими порциями в клей. Срок годности шпаклевки 1,5-2 ч. Наносить ее следует при помощи широких малярных шпателей с резиновым или пластмассовым рабочим краем.
      
      2.3. Полы из линолеума устраивают в следующей технологической последовательности:
      
      а) резиновый линолеум СК выдерживают при комнатной температуре не менее суток; после этого линолеум пригоняют и прирезывают по размеру помещения; нахлестка одного полотнища на другое должна быть равной 30 мм; раскроенные полотнища скатывают в рулоны и переносят в соседнее помещение; 

Рисунок 1. Прирезка кромок линолеума 

1 - нож; 2 - линейка; 3 - линолеум; 4 - основание. 

Рисунок 2. Раскрой и прирезка полотнищ линолеума
 
а) - раскрой по длине; б) - прирезка полотнищ по контуру; в) - стыковка смежных кромок внахлестку;
 
1 - линейка; 2 - изогнутый нож; 3 - отрезаемая часть полотнища; 4 - резак (нож). 

      б) на поверхность основания пола наносят мастику, разравнивают ее зубчатым шпателем и оставляют для подсушки не менее чем на 4 ч;

Рисунок 3. Зубчатые шпатели-гребенки 
      
а) - виды шпателей; б) - принцип работы шпателя. 

      в) после подсушки клеевого слоя в помещение вносят полотнища линолеума и укладывают их на основание с нахлесткой в 30 мм, под кромками на основание кладут полотняную ленту шириной 8-10 см, которая предохраняет кромки от приклейки к основанию;
      
      г) загибают каждое полотнище по длине лицевой стороной внутрь до середины и на тыльную сторону его наносят мастику зубчатым шпателем с утолщением слоя мастики по краям полосой 5-6 см; продольные кромки на ширине 1,5 см от края мастикой не промазывают;
      
      д) после 15-минутной выдержки для удаления растворителя полотнище, промазанное мастикой, осторожно, не сдвигая с места, прижимают к основанию, а затем прикатывают резиновым валиком или катком от центра к краям полотнища;      

Рисунок 4. Каток для прикатки линолеума 

     е) кромки смежных полотнищ прирезают одновременно острым ножом по линейке на расстояние 15 мм от краев; обрезки линолеума и полотняную ленту удаляют; затем без дополнительной промазки мастикой прижимают кромки к основанию и плотно прикатывают стыки.
      
      2.4. Мастики КН-2 и КН-3 в процессе работы удаляются с линолеума и инструментов тряпкой, смоченной бензином.
      
      2.5. Работу по устройству полов из релина выполняют звеном из двух человек - маляра 4 разряда и подсобного рабочего 2 разряда;
      
      маляр 4 разряда заготавливает, обрезает и наклеивает линолеум;
      
      маляр 2 разряда грунтует основание, наносит и разравнивает мастику для приклейки, прокатывает настланный линолеум ручным катком массой 40-50 кг, шириной 500-700 мм и разглаживает мешковиной от середины к краям. 
     
      2.6. Все  работы по устройству полов из рулонных   материалов должны вестись при температуре на уровне пола не ниже +5°С.
      
      2.7. График производства работ, производственная калькуляция трудовых затрат и материально-технические ресурсы составлены на устройство пола из резинового линолеума общей площадью пола 152,4 м.
      
      2.8. При выполнении работ по устройству линолеумных полов должны выполняться следующие требования к качеству работ:
      
      а) резиновый линолеум должен плотно прилегать к основанию; 
     
      на поверхности линолеума не должно быть короблений и вздутий, волнистости в кромках, стыках;
      
      б) неровности поверхности пола из релина при контрольной проверке ее 2-метровой рейкой не должны превышать 2 мм.   
           
      2.9. При производстве работ по наклейке линолеума надлежит соблюдать следующие правила техники безопасности:
      
      а) при   использовании   рекомендованных   клеящих   мастик КН-2 и  КН-3, содержащих легковоспламеняющиеся растворители (бензин, ацетон, этилацетат), необходимо строго соблюдать меры предосторожности;
      
      б) помещения, в которых производят настилку линолеума или плиток, необходимо регулярно проветривать;
      
      в) загустевшую мастику подогревать на кострах и электро-битумоподогревателях категорически воспрещается. Подогрев мастики производить только в закрытых емкостях, погружая их в горячую воду. Запрещается пользоваться открытым огнем в местах хранения мастики и на месте производства работ;
      
      г) котел для варки битума должен быть снабжен исправной крышкой. Из котлов мастику разливают ковшом, насаженным на длинную ручку. При использовании горячего битума на руки надевают рукавицы, а работу производят в защитных очках. Горячий битум следует подносить в бачках с плотно закрытой крышкой, наполненных не более чем на 3/4 емкости;
      
      д) перед едой и после работы протирают руки растворителем, а затем моют теплой водой с мылом.

3. Технико-экономические показатели 

Трудоемкость на всю площадь пола   .....     11,1 чел-дня
 
    "             "   100 м площади пола   ....     7,3 чел-дня
 
Выработка на одного рабочего в смену   ....13,78 м пола 

Материально-технические ресурсы
 
Таблица 1 

Наименование
 
	Единица
 измерения
 	Количество

Основные   материалы,   строительные детали   и   полуфабрикаты
 	
Резиновый линолеум 	м 	155,45 	
Мастика кумароно-каучуковая (КН-2, КН-3) 	кг 	132 	

Механизмы, инструменты, приспособления
 	
Щетки 	шт. 	2 	
Механический нож "Пилад" 	шт. 	2 	
Кисти 	шт. 	2 	
Шпатель зубчатый большой 	шт. 	1 	
Шпатель зубчатый малый 	шт. 	1 	
Металлические линейки 	шт. 	2 	
Молотки 	шт. 	1 	
Ножовки 	шт. 	1 	
Топоры 	шт. 	1 	
Ножницы гильотинные 	шт. 	1 	
Каток 	шт. 	1 	

       
График выполнения работ по устройству полов
 
Таблица 2
 
№
 
п/п 	Состав работ 	Единица
 измерения 	Объем
 работ 	Трудо-
 емкость на единицу измерения,  
 чел.-ч. 	Трудо-
 емкость на весь объем работ,
 чел.-день 	Состав 
бригады (звена), используемые механизмы
 
	График выполнения процесса 	
   	   	   	   	   	   	   	Рабочие смены 	
   	   	   	   	   	   	   	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
1 	Огрунтовка основания и покрытие полов линолеумом по готовому основанию 	м 	150 	0,39 	7,31 	Маляр: 
4 разряда - 1 	- 	- 	- 	- 						
2 	Пробивка гнезд в каменных стенах, постановка пробок и установка плинтусов с креплением к  стенам  и  установкой вентиляционных решеток 	" 	150 	0,16 	3,04 	  Подсобный рабочий: 
2 разряда - 1 				- 	- 					
3 	Мытье полов с подметанием 	" 	150 	5,7 	1,08 	  Машинист: 
4 разряда - 1 						- 				
4 	Покрытие пола мастикой 	" 	150 	0,018 	2,7 	  Такелажник: 
2 разряда - 1 						- 				
5 	Подъем материалов с подноской к рабочему месту 	т 	1 	0,15 	0,15 	  Подсобный рабочий: 
2 разряда - 1 							- 	- 	- 	
6 	Итого по норме 	

	

	14,28 	

      

Калькуляция трудовых затрат на устройство полов 
Таблица 3
       
Обоснование
 (ЕНиР  и др.)
 
	Наименование работ
 
	Единица измерения
 
	Объем 
работ
 
	Норма
 времени
 на единицу измерения
 чел. -ч
 
	Расценка
 на единицу
 измерения, руб. -коп.
 
	Затраты
 труда  на весь объем работ, чел. -день
 	Стоимость затрат труда на весь объем 
работ,
 руб. -коп.
 	
19-17 	Огрунтовка основания и покрытие полов линолеумом по готовому основанию на клеевой мастике КН-2 	м 	150 	0,39 	0-23 	7,31 	34-50 	
19-14, примеч. 	Пробивка гнезд в каменных стенах с изготовлением и постановкой пробок 	" 	150 	0,044 	0-02,3 	0,83 	3-45 	
19-14а 	Установка   готовых   плинтусов с креплением их к стенам (в жилых зданиях) 	" 	150 	0,11 	0-05,8 	2,06 	8-70 	
1-14, п. 1а, 1-11, п. 1а и б 	Подъем материалов башенным краном грузоподъемностью до 3 т на высоту до 12 м с разноской к рабочему месту на расстояние до 20 м 	1 подъем То же
 
1 т 	1
 
1
 
0,66 	0,083
 
0,166
 
1,64 	0-05,2
 
0-08,2
 
0-71,9 	0,01
 
0,02
 
0,12 	0-05
 
0-08
 
0-27 	
20-1-167 	Мытье полов с подметанием 	100 м 	1,524 	5,7 	2-50 	1,08 	3-80 	
19-11, п.  11 	Покрытие пола паркетной мастикой и натирка его щетками 	" 	1,50 	13,5 	6-66 	2,70 	10-15 	
19-15 	Установка вентиляционных решеток 	10 шт. 	0,6 	2,1 	1-17 	0,15 	0-70 	
   	Итого 	   	   	   	   	14-28 	61-90